설  계  지  침  서

(안동복합 2호기 직원사택 신축공사 설계용역)

2025.  3.

전원개발처

토건기술부

		목 차

□  용 역 계 획 서	1

□  용 역 개 요	2

□  예 정 공 정 표	5

□  설계 공모 지침서	6

□  계획, 중간 및 실시설계 시방서	21

□  용 역 계 획 서

용 역 명	안동복합 2호기 직원사택 신축공사 설계용역
소 요 예 산	총 소요예산 : 263,737,000원 (부가세 별도) - 확 정 분 : 231,199,000원 - 정 산 분 : 10,538,000원 - 사 급 분 : 22,000,000원
예 산 과 목	18812-X-YA01(안동복합2-직원사택 신축공사)
용 역 기 간	착수후 365일
용 역 방 법	건축설계 공모 후 당선작 업체와 수의계약
용 역 책 임 자	전원개발처장
용 역 감 독 자	전원개발처장이 임명한 자
준 공 검 사 자	전원개발처장이 임명한 자
준 공 인 수 자	전원개발처장
비 고

□  용  역  개  요

1. 용 역 명 : 안동복합 2호기 직원사택 신축공사 설계 용역

2. 위    치 : 경상북도 안동시 풍산읍 안교리 407, 408-2부지

3. 목    적

○ 안동복합 2호기 근무직원의 안정적인 주거여건 조성 및 지역주민 합의사항 이행,

지역경제 활성화를 위해 사택건설 추진

4. 신축규모

가. 부지면적 : 약 2,281㎡

나. 사택 신축

1) 주거공간

- 건축연면적/층수 : 약 2,126㎡ / 지상 7층 이내

- 구 조 : 전용면적(모듈러), 공용면적(철근콘크리트 구조)

※ 전용면적 : 사택 20세대 주거면적

※ 공용면적 : 복도, 기계실, 주차장, 엘리베이터, 헬스장 등 전용면적 외 공간

- 규 모 : 가족사택(72.72㎡) 5세대, 원룸형사택(42.97㎡) 15세대

2) 외부공간(외부조경, 테니스장, 전기차 충전시설 등)

5. 용역범위

가. 건축사의 업무범위와 대가기준에 의한 단계별(계획, 중간, 실시설계) 설계 업무 수행

(운동시설 및 조경시설, 주차장을 포함한 단지 배치계획 포함)

- 주거시설(가족사택, 원룸형사택), 공용공간(기계실, 계단실, E/V실 등)

- 부지 조경, 옥외시설물(테니스장 등), 도로 및 주차장 등

나. 경관심의, 건축허가 등 대관 인․허가, 심의 등에 필요한 일체 도서작성, 행정절차 수행 및 대관 인․허가 취득

다. 법에서 정하는 건축물 에너지효율등급, 녹색건축 인증, 제로에너지건축물 인증 등 에너

지인증을 위한 검토서 및 설계도서 등 제반서류 작성, 인증･평가 기관 설계협의 및 인

증취득 업무일체(평가수수료는 발주처가 납부)

라. 건설공사 발주 서류 작성 : 입찰안내서, 공사시방서, 설계내역서, 예정공정표 등

마. 각종 계산서 작성 : 구조계산서, 수량산출서, 부하계산서 등

바. 종합 디자인 계획 : 건축물 내·외부 경관 및 색채디자인 등

사. 기타 발주자가 요구하는 사항

6. 공모방식 : 일반 건축설계 공모방식

7. 용역기간 : 착수 후 12개월(공모기간 제외)

1) 계획·중간·실시설계 : 착수 후 150일간

2) 공사발주 ~ 준공 : 215일간(사후설계 관리기간: 준공도서 작성 및 사용승인 등)

8. 시 방 서 : 붙임 설계용역 시방서에 의함

9. 소요예산                                                              (단위 : 원)

구 분	세 부 항 목		산출금액	비 고
확정분	설계비	계획설계	46,239,800	20%
		중간설계	69,359,700	30%
		실시설계	104,039,550	45%
		인허가	11,559,950	5%
		확정분 소계	231,199,000
정산분	지반조사비		9,500,000	실적정산
	손해배상보험료		1,038,000	실적정산
	실적분 소계		10,538,000	단위이하 절사
사급분	우수작(1점)		10,000,000	설계공모 상금
	가 작(2점)		12,000,000
	사급분 소계		22,000,000
합 계			263,737,000

※ 실적정산시 정산금액은 설계가 이내로 한정함

10. 건축설계 공모 심사방법

가. 사외 전문가로 구성된 심의위원회 구성

나. 심의위원회의 심사결과에 따라 고득점 순으로 당선예정작 및 입상작을 선정(공개)

다. 세부기준은 남부발전 「건축설계 용역업체 선정 및 관리세칙」에 따름

□  예  정   공  정  표

□ 용역명 : 안동복합 2호기 직원사택 신축공사 설계용역  (착수후 365일간)

구 분		2025년												2026년
공 정 (월)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업일정	설계			설계공모				계약
									계획·중간·실시설계					사후설계 관리기간
	인허가											심의 및 건축허가								사용승인
	공사											입찰공고 및 계약		신축공사(7개월)

□ 설  계  공  모  지  침  서

❏ 일반사항

Ⅰ. 사업개요

1. 용 역 명 : 안동복합 2호기 직원사택 신축공사 설계 용역

2. 추진목적

○ 안동복합 2호기 근무직원의 안정적인 주거여건 조성 및 지역주민 합의사항 이행,

지역경제 활성화를 위해 사택건설 추진

3. 개  요

1) 사  업  명 :「안동복합 2호기 직원사택 신축공사」

2) 사 업 위 치 : 경상북도 안동시 풍산읍 안교리 407, 408-2부지

3) 지 역·지 구 : 제2종 일반주거지역 (지구단위계획)

4) 부 지 면 적 : 약 2,281㎡

5) 직원사택 신축

○ 주거공간

- 건축연면적/층수 : 약 2,126㎡ / 지상 7층 이내

- 구 조 : 전용면적(모듈러), 공용면적(철근콘크리트 구조)

※ 전용면적 : 사택 20세대 주거면적

※ 공용면적 : 복도, 기계실, 주차장, 엘리베이터, 헬스장 등 전용면적 외 공간

○ 외부공간(외부조경, 테니스장, 전기차 충전시설 등)

6) 추정 공사비 : 약 4,471,745천원 (제경비 포함, 부가세 별도)

공사비는 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 인테리어, 폐기물처리 등 각종 법령에서 정하는 제반비용을 포함한다.

7) 예정 설계용역비 : 약 231,199천원 (제경비 포함, 부가세 별도)

설계용역비는 계획·중간·실시설계비, 에너지인증 용역비 등 제반비용을 포함한다.

8) 설계용역 기간 : 착수 후 12개월(공모기간 제외)

※ 대관 인·허가 및 공사기간에 따라 변경될 수 있음

9) 사업일정(잠정)

○ (‘25.8 ~‘25.12) 계약 및 실시설계 / (‘26.1 ~ ‘26.7) 착공 및 준공

Ⅱ. 설계공모 개요

1. 설계공모 방법 : 일반 건축설계 공모

2. 설계공모 일정

구 분		일 정
설계공모 공고		2025. 3. 24 ~ 4. 24(목)
참가등록		2025. 3. 24 ~ 4. 24(목) 18:00 마감 (우편 및 방문접수)
질의접수		2025. 5. 12(월) 09:00 ~ 18:00 (E-Mail 및 팩스)
질의회신		2025. 5. 19(월) (E-Mail)
작품제출		2025. 6. 23(월) 18:00 마감 (방문제출)
기술검토		2025. 6. 25(수) (예정)
작품심사	1차	2025. 6. 30(월) (예정)
	2차	2025. 7. 1(화) (예정)
당선작발표		2025. 7. 2(수) (예정)

※ 상기 일정은 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경된 일정은「한국남부발전」홈페이지(http://kospo.co.kr / 고객참여 / 공지사항) 에 공지

※ 1차심사: 2차심사 대상작 선정(5작품) / 2차심사: 당선작 및 입상작 선정

3. 설계공모 응모자격

가. 「건축사법」 제7조 규정에 의한 건축사 자격을 소지하고 동법 제23조에 의거 건축사사무소를 개설하여 국토교통부장관에게 건축사업무 신고를 필한 자

나. 외국 건축사 자격(면허) 소지자의 경우, 단독으로 본 공모에 참여 가능하나, 당선될 경우 건축사법시행령 제21조의 2에 의거 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무 수행계약을 하여야 본 설계용역 계약을 체결할 수 있다.

※ 건축사는 본 공모 참가 등록시점 기준으로 해당국 관련 법에 의거해 건축사 자격조건을 유지하고 있어야 하며, 이를 문서로 증명할 수 있어야 한다.

4. 유의사항

가. 당선자는 용역계약시 구조·토목·기계·통신·소방·조경분야 등 관련법에 따른 설계면허가 없는 경우에는 건축사 사무소를 개설한 자가 공동수급업체 대표자가되어 관련법에 따른 설계 자격을 보유한 업체와 공동도급(분담이행방식)으로 시행하거나, 설계 자격을 보유한 업체에 해당분야 설계를 하도급 할 수 있다.

나. 전기설계는「전력기술관리법」규정에 따라 설계공모에 포함하지 않고 별도 발주 예정

다. 모듈러 공업화 주택 인증서 자격 보유업체와 구조검토 등 설계 협업을 필요로      하며, 발주처가 요청할 경우 그 증빙자료(구조검토서 등)를 제출해야 한다.

5. 참가 등록

가. 등록마감 : 2025. 4. 24. (목) 18:00까지

나. 등록방법 : 우편 및 방문접수

1) 우편접수 시 반드시 등기우편으로 접수, 당일 18:00까지 우편접수 소인분까지 유효

※ 우편접수시 등기우편이 아닌 일반우편 접수 및 담당자와 유선확인을 거치지 않을 경우 발생한 불이익에 대해서 응모자에게 책임이 있음을 양지하기 바랍니다.

2) 신청장소

① 주소 : 부산시 남구 문현금융로40 부산국제금융센터 32층

한국남부발전(주) 전원개발처 토건기술부

- 평일 09:00 ~ 18:00까지 접수

② 전화번호 : 070-7713-8544, 8547 (FAX : 051-639-9028)

다. 구비서류 (※ 사본제출시 원본 대조필에 건축사 인장 날인 요망)

1) 응모신청서 1부【기타서식 1】   ※ 공동 응모일 경우 공동수급협정서 첨부

2) 설계공모 참여자 명단 1부【기타서식 2】 및 실무책임자 명함 1매

3) 사용인감계 및 인감증명서(법인의 경우 법인인감증명서) 각 1부

4) 대표자 선임계 1부(공동응모 할 경우에 한함)【기타서식 3】

5) 공동응모 협정서【기타서식 4】

6) 법인등기부등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 각 1부.

7) 건축사면허증(또는 외국 건축사면허취득자 신고필증) 및 건축사사무소 등록증

8) 관련법규 검토서【기타서식 7】

9) 보안특약【기타서식 8】

6. 질의응답

가. 접 수 일 : 2025. 5. 12.(월) 09:00 ~ 18:00

나. 접수방법 : E-Mail 및 팩스, * 접수 확인 필 (070-7713-8544, 8547)

(E-Mail: beaverlove@kospo.co.kr, kkh6096@kospo.co.kr, FAX : 051-639-9028)

다. 서면으로 1회에 한하여 질의할 수 있으며, 질의에 대한 회신은 응모등록자 전원에게 일괄 통보한다(E-Mail)

라. 질의는 서면질의서【기타서식 5】에 의한 전송(FAX) 또는 E-Mail(질의서는 ＊.pdf

파일형태로 첨부)에 한한다.

마. 질의서에 대한 답변사항은 본 설계공모의 지침서와 동일한 효력을 갖는다.

Ⅲ. 작품제출 및 제출도서 작성

1. 작품 제출

가. 작품제출일 : 2025. 6. 23. (월) 09:00 ~ 18:00

나. 제출 방법 : 방문 제출

다. 제출 장소 : 한국남부발전(주) 전원개발처 토건기술부

라. 제출서류 및 도서목록

1) 응모작품 제출서

2) 설계설명서 및 도면 (A3 : 420㎜ × 297㎜) 10부

3) 설계도서 USB 1매

2. 제출시 유의사항

가. 참가등록을 하지 않은 자는 작품을 제출할 수 없다.

나. 응모자는 제출도서를 포장하여 외부포장 우측상단에 응모신청서상의 접수번호를 기재하여 제출한다.

다. 작품의 제출은 1회에 한하며, 제출된 작품에 대하여 추가제출이나 수정작업을 인정하지 않는다.

라. 제공된 서식의 기재란 이외에 일체의 제출도서류에는 접수번호를 기재하지 않는다.

마. 제출도서류에 암호 또는 다른 어떠한 기호도 삽입해서는 안 되며, 이를 위반한 작품은 심사대상에서 제외할 수 있다.

바. 본 도서작성요령 및 제출방법에 의거하지 않은 작품은 접수치 않거나 심사대상에서 제외하는 것을 원칙으로 한다.

사. 마감시간을 준수하여야 하며, 마감시간 이후 제출되는 응모작에 대해서는 접수하지 않는다.

아. 기타 실격사항은 심의위원회의 결정에 따른다.

3. 작품도서의 작성

가. 공통사항

1) 축척과 방위는 각 도면, 도판의 좌측상단에 정확히 표현하여야 한다.

2) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하며 미터법을 사용하며, 영문표기가 필요한 경우에는 가능한 한글과 병기하되 한국어와 영문 사이에 해석상 충돌이 있을 경우 한국어를 우선으로 한다.

나. 설계설명서 및 도면

1) 제출부수 : A3 - 10부 (좌편철)

※ 표지, 목차, 렌더링 하지 않은 3차원 이미지, 간지 포함 30매이내

2) 재    질 : 백상지

○ 표지(앞, 뒷면) : 아트지 200g/㎡

○ 그 외 : 백색 백상지 100g/㎡ 이하(코팅지 사용 금지)

3) 제본방법 : 스프링, 클립 등은 사용불가하며, 접착제 제본만 가능

4) 내    용

○ 목 차

○ 설계개요

○ 대지현황, 주변환경 분석, 기능 및 공간분석 등

○ 기본계획개념 및 디자인 개념, 설계의도 등

○ 도면 : 배치도(조경 및 도로 표시), 각 층 평면도, 4면 입면도, 단면도 등

○ 입면계획 및 실내외 마감재료

○ 조경 및 외부공간 계획, 구조 및 토목계획

○ 에너지절약계획

○ 실별 면적비교표

○ 추정공사비 개략 내역서

○ 법규검토서

5) 유의사항

○ 설계설명서의 양식은 설계자 임의 작성

○ 표지는 【기타서식 9】를 활용, 백색(코팅금지)으로 하며

「안동복합 2호기 직원사택 신축공사 설계공모」만 명기

○ 회사명 및 회사를 특정할수 있는 문구, 표시 등은 표기하지 않아야 한다.

라. 배치도(Plot Plan) 판넬

○ 크 기 : A3 – 1매 (재질 : 하드보드)

마. 설계설명서 및 설계도면이 수록된 USB 1매

○ 설계도면은 DWG 및 PDF파일, 상세설명서 파일(원본파일 및 PDF), 렌더링하

지 않은 3차원 이미지, 추정공사비 개략내역서(원본파일 및 엑셀)

Ⅳ. 심사 및 당선작 선정

1. 기술검토

□ 제출된 작품에 대해 관련법, 공모지침 등 위반사항 및 전문기술검토서를 작성하여

심사전 심사위원회에 전달한다. 심사위원회는 이를 바탕으로 실격 혹은 심사불이익

처분을 결정한다.

2. 심사일정

가. 1차심사: 2025. 6. 30.(월) 2차 심사 대상작 선정(5작품)

○ 1차 심사는 기술검토위원이 작성한 기술검토서를 확인하여 실격 및 심사의 불이익 처분을 결정하고, 심사위원회에서 정하는 방법에 따라 2차심사에 진출할 5개 이하의 작품을 선정한다. 단, 심사위원회의 의결에 따라 작품의 수량은 변경될 수 있다.

나. 2차심사: 2025. 7.  1.(화) 당선작 및 입상작 선정

※ 10개 작품 미만 접수시 1차, 2차 심사를 통합하여 진행할 수 있다.

3. 작품심사

가. 우리 회사 방침에 의거하여 사외 전문가에 의한 심사위원회를 구성, 설계심의 위원회의 심사결과에 따라 고득점순으로 당선 예정작 및 입상작을 선정한다.

나. 2개 이상 작품이 접수되지 않을 경우에는 재공고한다.

다. 재공모결과 응모 작품 수가 1개인 경우에는 관련법령에 의거, 사업수행능력평가를 적용하여 당선여부를 결정할 수 있다. 단, 응모작품이 부적격으로 판단된 경우 (응모작품 수가 없는 경우 포함) 설계공모가 아닌 다른 입찰방법을 적용한다.

라. 당선작과 우수작에 2작품 이상에서 동점이 발생하는 경우에는 해당 작품을 대상으로 재심사를 실시한다.

마. 입상작품의 수준이 현저하게 낮아 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정하는 경우에는 당선작 없이 최고득점 1점에 한하여 우수작으로 포상할 수 있다.

4. 평가항목 및 배점기준

□ 평가기준: 건축설계 용역업체 관리세칙에 따름

평가항목	세부사항	배점
배치 계획	· 배치 및 토지 활용도 · 모듈러 배치의 효율성 · 시설 및 공간 이용의 편의성 · 부지내 건물과의 연계 및 보행자·차량 접근 계획의 적절성	20
공간 계획	· 내·외부 공간 계획의 적절성 · 공간이용의 효율성 · 동선 및 기능배분의 타당성 · 세대평면의 모듈화 계획	20
디자인 계획	· 디자인의 독창성(Landmark) · 모듈러 입면 특화 계획 · 주변공간 및 환경과의 연계 및 조화 · 색상 및 재료 계획의 적절성	40
기술 계획	· 모듈러 현장 시공 용이성 · 환경친화적 설계기법의 우수성 · 비용절감 등 건설 및 유지관리의 경제성 · 건물구조 및 공법 등의 안전성·우수성	15
기타	· 공공성 제고방안, 특수조건에 대한 대처방안 등 추가 적으로 필요한 사항	5

5. 입상작 발표

입상작 발표는 개별통보 및 세움터와 홈페이지(www.kospo.co.kr)에 게시한다.

6. 입상 작품수 및 상금

가. 당선작은 계획·중간·실시 설계권 부여로 상금지급 대상에서 제외한다.

나. 입상작품수 및 상금내역

구 분	입상 작품	상 금
응 모 작	4점	○ 당선작: 계획·중간·실시 설계권 부여 ○ 우수작 : 1,000만원 ○ 가작 1순위 : 700만원 ○ 가작 2순위 : 500만원

※ 설계심의 결과 응모작이 일정 수준에 미달시는 설계 심의위원회 결의에 의거

상금(계획ㆍ중간ㆍ실시설계권 포함)을 지급하지 아니할 수 있다.

다. 설계용역에 대한 업무 및 보수는 우리회사 기준에 따른다.

Ⅴ. 설계지침

1. 일반사항

가. 본 시방서는 한국남부발전주식회사(이하‘우리회사’라 한다.) 안동복합 2호기 직원사택 신축 설계공모에 적용하며, 본 시방서에 명기되지 않은 사항 및 해석상의 견해차이는 건축사법 및 국토교통부고시 건축 설계공모 운영지침 등 제반 법규와 우리회사 해석에 따른다.

나. 설계자는 제출된 일체의 서류(설계도서)에 대하여 모든 책임을 진다.

다. 용역업무 진행 중 제출하는 각종 서류는 우리 회사 제정 서식을 활용한다.

2. 설계공모 업무범위

○ 본 지침서에 제시된 설계조건과 현장여건을 기초로 하여 계획․중간 및 실시설계의

기본이 되는 다음 각 항의 설계를 말한다.

가. 건축사항

1) 건물 배치도(건물배치, 주차장 및 도로망 표시 포함)

2) 각층 평면도

3) 4면 입면도(건물별)

4) 주단면도(층수, 층고 표시 포함)

5) 마감표

6) 각종 설계설명서(토목, 기계, 소방, 정보통신, 인테리어, 소방 포함)

7) 제시면적 대비 설계면적 비교표

8) 추정공사비

9) 에너지절약계획

10) 기타 필요한 사항

나. 조경사항

1) 조경계획도

2) 식재 및 조경시설물 평면도

3) 기타 필요한 사항

다. 토목사항

1) 토목구조물, 종합계획 평면도(배수, 도로, 옹벽)

2) 대지 종․횡 단면도

3) 부지정지계획 및 가시설계획도

4) 토공 유용계획서

5) 기타 필요한 사항

라. 기계사항

1) 각 설비 시스템 선정 및 방식의 비교설명서 (입상 PIT, 연도 등 고려)

2) 각 설비 시스템의 계통도 및 자동제어 시스템 선정 (소화설비 포함)

3) 기타 필요한 사항

마. 소방, 정보통신 설비사항

1) 통신설비 간선도 및 평면도

2) 자동화재 탐지설비 간선도 및 평면도

3) 기타 필요한 사항

3. 설 계

가. 설계는 관계법령과 해당 행정관서의 조례, 지시 등에 적합하여야 한다.

나. 용역의 추가 또는 축소

설계 전 또는 설계중이라도 우리회사 방침 변경 등에 의거 용역범위를 추가 또는 축소할 수 있으며 설계자는 이에 따라야 한다. 이때, 변경에 소요되는 용역기간은 조정할 수 있다.

다. 대관 인ㆍ허가 사항

1) 설계공모 해당업체는 제반 관련법규에 따른 법규검토서(대관 인허가 가능여부 포함)를 제출하여야 하며, 대관 인허가 추진이 불가능 할시 설계공모 업무를 중지하고 우리회사 지시에 따른다.

2) 설계공모 참가자는 반드시 현장을 답사하여 정확한 분석을 선행한 후 계획에 착수하도록 한다.

3) 설계공모에 당선된 업체는 대관 인허가 가능 시에 한하여 계획ㆍ중간ㆍ실시설계에 따른 용역비를 지급한다.

4. 설계기준

가. 모든 설계는 우리회사가 제시한 요구조건에 부합되어야 한다.

나. 자재규격

공사용 자재는 한국산업규격(ＫＳ), (Ｑ), (전), (검) 및 (품）표시규격 순으로 사용함을 원칙으로 하며, 녹색제품구매촉진법에 따른 환경표시 인증제품, GR제품 및 NET 인증제품 등을 우선적으로 고려하여 적용한다.

다. 계 산

계산에 필요한 기준(설계방식 및 적용공식 등)은 가능한 한 국내기준을 활용함을 원칙으로 한다. 단, 외국 규정의 적용이 불가피할 시는 예외로 하며 환산단위는 우리회사의 지시에 따른다.

라. 설계자료 제공

설계기준 및 기본자료 중 우리회사 제정의 자료나 규정, 서식은 우리회사에서 제공한다.

５. 도면 작성

가. 규격

우리회사 도면관리 요령의 도면규격 A3형을 원칙으로 하며, 특별한 경우 예외로 할 수 있다.

나. 기재요령

도면에 기재하는 단위는 C.G.S 단위를 사용하고 명칭 및 참고 기재사항은 한글로 기재한다.

다. 축척

A3규격에 맞추어 임의로 하되 각 도면에 축척을 표기한다.

６. 설계조건

가. 기본방침

1) 주거공간

○ 에너지를 책임지는 미래에너지기업 KOSPO의 역동성을 반영한 사택을 설계한다.

○ 주변 경관과 어울리며, 랜드마크 역할을 할 수 있도록 설계한다.

○ 미래지향적인 남전의 이미지와 지속가능성을 부각시켜 상징성과 존재감을 부여할 수 있도록 건물 외관 및 소재와 색채를 계획하도록 한다.

○ 거주 직원들의 만족감과 자부심을 고취시킬 수 있는 창의적이고 실용적인 설계안이 도출되도록 한다.

○ 세대별 프라이버시 확보를 위해 층별/세대별/실별 소음 및 진동을 차단할 수 있는 구조를 계획하되 관련 기준 이상이어야 한다.

○ 외부로부터의 개인의 프라이버시 확보가 가능한 차폐 및 차단장치를 계획한다.

2) 환경친화적인 단지 조성

○ 주변경관과 유기적이며 환경친화적 건물 및 옥외공간이 될 수 있도록 고려한다.

○ 옥외공간은 보행자중심 공간 및 직원들의 휴식공간이 될 수 있도록 한다.

○ 쓰레기 및 분리수거 장소(폐기물보관함, 분리수거함, 음식물수거용기 등)을 확보하되,

시각적으로 은폐되도록 계획한다.

3) 에너지 절약형 시설 계획

○ 기능과 구조가 조화되어 유지관리 등 경제성 있는 건물계획이 되도록 하는 한편 자연채광 등 패시브 설계를 고려한 에너지 절약계획을 반영한다.

○ 관련법*에 따라 녹색건축인증, 에너지효율인증, 제로에너지건물 인증, BF(Barrier Free) 및 신재생에너지 설치계획을 포함할 수 있으며 실시설계 단계에서 세부등급을 조정할 수 있다.「녹색건축물 조성지원법 등」

4) 신재생에너지 이용건물 설계 반영

○ 관련법*에 따른 에너지 효율등급을 충족할 수 있는 신재생 에너지 시스템을 적용할 수 있도록 건물을 계획하며, 옥상 혹은 지붕에 태양광·신재생에너지 설비 설치를 우선 적용하여야 하며 경관 및 미관을 고려하여 계획하여야 한다.「녹색건축물 조성지원법 등」

5) 쾌적한 건물환경 조성

○ 사용자에게 쾌적함(Amenity), 안전함(Safety), 편리함(Convenience)을 제공할 수 있도록 건물 내ㆍ외부 공간을 구성한다.

6) 시공 및 운영, 유지관리가 효율적, 경제적으로 이루어질 수 있도록 하며 사용자의 편의성과 공간활용의 효율성을 극대화 한다.

7) 주차장의 경우 전기차 충전 인프라 확보 측면에서 전기차 충전구역을 확보한다.

나. 규모 및 배치계획

1) 지리·지형적 조건과 건물의 기능등 특성을 반영한 조형미를 구현하고 주변 컨텍스트를 고려함과 동시에 심미적이며 상징성을 부여할 수 있는 매스계획 유도

2) 증축 등 향후 여건변화에 탄력적으로 대응할 수 있도록 가변적인 공간계획 도출을 유도함과 동시에 상징성 부여 가능한 매스계획 제시

3) 단지계획

○ 주차장은 가급적 지상옥내화하여 지상은 보행자 위주의 야외·휴식·녹지 등 열린공간으로 조성하며 Mass와 옥외공간은 합리적인 체계와 상호 연계 및 분리를 통해 유기적인 관계를 갖도록 계획한다.

○ 배치계획은 반드시 높이, Mass, 균형 등 미적 균형감과 조화가 고려되어야 한다.

○ 사용성과 기능·형태등 설계자의 의도에 따라 매스의 분할 등이 가능하며, 이 경우 실내 또는 연결통로, 데크 등 자연스럽게 동선이 이어질 수 있도록 한다.

4) 차량 진출입 계획

○ 풍산중앙길에서 출입이 가능한 차량출입구를 계획하고, 이 경우 차량진입과 보행자 동선의 간섭을 최소화 하는 방향으로 설계한다.

5) 옥외공간 최적화

○ 부지조건을 최대한 활용하여 경제적 배치가 되도록 하고, 녹지 및 휴식공간 등 옥외공간을 최대한 확보한다.

○ 야외공간은 정문 및 외부에 인지되는 장소로서 단지 내 건축물과 상호간, 또한

인근 풍산중앙길 등과 완충지대 및 매개공간이 되도록 한다.

○ 옥상, 야외공간의 활용계획을 수립하여 거주 직원들이 산책 및 운동, 소규모 행사를 개최할 수 있는 공간으로서 휴식을 취하고 마음껏 누릴 수 있는 창의적 공간으로 구성한다.

○ 지상은 보행자 위주의 공간으로 계획하고 환경친화적(투수성 고려) 포장계획을 고려한다.

○ 조경, 보행로, 옥외시설물(테니스장 등)의 설계는 통일성·심미성·일관성을 고려하고 건물과 단지가 조화를 이루도록 계획한다.

6) 주차장 계획

○ 주차장은 가급적 지상옥내화하여 동선의 효율성과 사용자 편의성을 도모하고 부지활용 극대화로 옥외공간을 최대한 확보하여 전체 발전소 부지 내 부족한 녹지 및 휴식공간을 최대한 확보하도록 한다.

○ 대관 인허가사항 및 사택부지내 법정주차대수 계획을 고려하여 가급적 많은 주차대수를 확보할 수 있도록 한다.

○ 주차장과 출입구의 바닥레벨을 맞추거나 완만한 경사로 설치로 임산부·장애인·노약자의 이용에 불편함이 없도록 하며, 약자배려 주차면을 입구에 최우선하여 배치한다.

다. 공간 및 시설계획

1) 단위세대 평면계획은 아래 기준에 맞게 설계하여야 한다.(모듈러)

기준전용면적	면적구분(㎡)	세대수	타입	비고
A형	72.72(전용면적 기준)	5	가족사택	면적은 기준치 이내로 제한
B형	42.97(전용면적 기준)	15	단신부임(원룸형)

※ 전용면적은 건축법에 따라 산정하며, 서비스 면적(발코니)을 포함하지 않는다.

※ 가족사택(5세대)의 경우 원룸과 투룸으로 분리가능토록 설계한다.

2) 건축, 조경, 실내환경 등 모든 공간계획에 유니버셜디자인(Universal Design)의 원리와 배리어프리(Barrier Free) 개념 도입으로 근무자와 이용자의 편의를 도모한다.

3) 해당 시설 내 공간별 기능 및 실간 연계 등, 분리가 필요한 시설 등을 고려한 합리적인 동선과 상호연계성·시설조닝 계획을 유도한다.

4) 일조 및 조망과 시각적, 기능적 효율성을 고려하되, 미래지향적으로 다양화된 창의적인 평면·단면 형태 디자인을 연출할 수 있도록 계획한다.

5) 적정한 전위공간 및 매개공간(로비 등) 확보로 쾌적하고 개방·소통·수평적 분위기를 조성한다.

6) 각 실별 기능 및 실내환경을 고려한 적정 천장고 및 필요 설비공간 등을 반영하여

밝고 쾌적한 공간이 될 수 있도록 한다.

7) 공간의 가변성을 확보하고 필요시 확장 및 변화에 대응 가능하도록 계획한다.

8) PD, AD, EPS, TPS 등은 계획단계부터 유지관리를 고려하여 사람과 장비가 출입 가

능하도록 충분한 크기로 고려한다.

9) 주거공간 및 외부인 출입가능 공간 간의 독립성이 확보될 수 있도록 한다.

10) 헬스장과 샤워·탈의실은 연계하여 설치하며 실외 체육시설 이용자의 사용성을 고려한다.

라. 입·단면 계획

1) 부지 조건 및 주변 컨텍스트를 고려하고 미래지향적인 남부발전의 상징성과 조형성, 지속가능성이 투영된 기능적으로 심미적인 매스 및 의장을 계획한다.

2) 용도 및 기능을 반영하여 각각의 독창성을 부여하되 전체가 조화롭거나 통일성을 부여할 수 있는 입면을 고려하여 설계한다.

3) 자연채광, 환기, 조망을 고려하고 운영·관리·업무상 유기적으로 연계될 수 있도록 계획한다.

마. 일반사항

1) 설계공모시 마감자재는 미관과 경제성 및 시공성을 고려하여 결정한다.

2) 설계면적은 각 실 제시면적의 ±10% 범위내로 하며, 합계면적은 ±10% 범위내에서 인정한다.(주거공간 면적은 기준면적 이내로 제한)

3) 대지와 관련된 각종 토지 관련 세금을 감안, 건축면적을 적절히 배치하여 세금중과를 방지토록 함으로써 경제적인 설계가 되도록 한다.

4) 해당 행정관서의 관련 설계 시행지침에 의거, 건축물의 색채 및 마감과 차량출입구등을 적절히 배치한다.

5) 임산부·장애인 등 노약자를 대상으로 공용공간(건물 및 부지내)을 이용하는데 불편함이 없게끔 하며 건물내 장애인을 위한 편의시설을 장애인·임산부·노인 등의 편의 증진보장에 관한 법률에 저촉되지 않도록 설계하여야 한다.

6) 건축물의 구조설계는 주택법에서 정하는 기준을 준수하도록 한다.

바. 특기사항-모듈러 설계지침

1) 모듈러 유닛의 폭과 너비는 운송조건을 고려하여 단변방향 3,400mm를 초과하지 않도록 하며, 장변 방향은 12,000mm이하로 설계한다.

2) 모듈러 유닛의 높이는 차량, 도로, 터널 등의 운송조건을 고려하여 차량 적재시 최대 4,200mm를 넘지않도록 설계한다.

3) 모듈러 유닛의 수평 및 수직 접합시 주 기둥열을 일치 시킬 것을 권장하며, 주기둥열이 불일치 될 경우 사이기둥 보강, 전이보의 활용 등 구조적 문제가 없도록 설계한다.

4) 모듈의 배치는 편복도, 중복도 중 설계내용에 맞춰 선택적으로 활용하되, 편복도형 배치의 경우 모듈의 단변방향에 복도를 배치하여 모듈러 유닛과 일체화하는 것을 권장한다.

5) 모듈을 구성하는 주요 부재(벽, 보, 기둥, 바닥, 지붕 등)는 건축물의 피난·방화구조등의 기준에 의한 규칙에 적합하도록 설계한다.

6) 1.5개 이상의 모듈러 유닛 조합세대는 모듈간 접합부에 대한 구조연결, 방수, 기밀, MEP(난방, 환기, 위행) 연결을 고려하여 설계한다.

7) 모듈러 PD는 유지 보수를 고려하여 복도 쪽 공용부에 면하게 배치하는 것을 권장하며, 공용배관의 공간은 모듈간 설비연결이 용이하도록 현장 설치공간이 확보 될 수 있도록 설계한다.

8) 모듈러 유닛의 설비배관은 현장설치를 고려하여 층상배관을 권장하며, 욕실 및 화장실은 PD공간과 인접하게 계획하는 것을 권장한다.

9) 발코니에 세탁실이 계획되는 경우 진동을 최소화하기 위해 발코니가 캔틸레버 형식이 되지 않도록 구조설계하여야 한다.

10) 모듈러의 양중 및 현장설치 단계에서 양중장비의 설치 및 운용이 가능하도록 건축물을 설치한다.

Ⅵ. 기  타

1. 당선작 설계자의 의무

○ 당선자는 전문위원회 및 심의위원회의 지적사항과 발주부서의 요구사항을 종합하여 설계안에 대해 변경 및 보완이 필요할 경우 계획ㆍ중간ㆍ실시 설계 시 수정, 보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

가. (PT자료 제출) 당선작 설계자는 설계공모 심사결과 발표 후 7일 이내에 프리젠테이션 자료를 작성하여 제출한다.

나. (각종 인증업무 등) 당선작 설계자는 관련법에 따른 에너지 인증(녹색건축, 제로에너지 등) 및 기타 인허가에 필요한 각종 인증취득 관련업무 일체를 수행하여야 한다. 다만, 이에 소요되는 인증수수료 등은 발주기관 부담으로 한다.

다. (현황측량 및 지반·지장물 조사) 당선작 설계자는 설계용역 계약체결 후 조속히 현황측량 및 지장물 조사를 실시하여야 하며 지반조사가 필요한 경우 공(孔)의 규격 및 개수, 지반조사 시료 제출, 측량의 종류·범위 등의 세부내용은 발주처와 협의 후 실시한다.

라. (설계의 안전성 검토) 당선작 설계자는 건설공사의 안전사고 예방을 위해서 관련법규*에 따라 설계도서 작성시 가설구조물[흙막이 가시설, 동바리, 비계 등]의 구조검토

결과를 포함하여야 하며, 발주기관이 설계의 안정성 검토를 실시할 수 있도록 관련 보고서 작성 등을 하고 검토결과를 설계에 반영·수정하여야 한다.

* 관련법규 : 건설기술진흥법 제48조5항, 동법 시행령 제75조의2

마. (손해배상공제보험 제출) 당선작 설계자는 관련법규*에 따라 설계업무의 고의·과실로 업무목적물, 제3자, 발주기관 등에 재산상의 손해를 입힌 경우 그 손해를 배상하기 위하여 손해배상책임 공제보험을 가입하고 실시설계 완료시 제출하여야 한다. (가입기간:공사 완료일까지)

* 건축사법 제20조(업무상의 성실 의무 등)

2. 작품반환

가. 응모작품은 아래 기간 이내에 응모자가 회수하여야 하며 이에 따른 제반비용은 응모

자가 부담한다.

구 분	반 환 기 간	비 고
일 정	입상작 발표로부터 7일간	당선작은 제외

나. 반환기간 내 회수해가지 않은 작품은 우리회사에서 임의 처리한다.

다. 제출된 USB는 반환하지 아니한다.

3. 분쟁

○ 설계공모는 대한민국 법률 및 우리회사 규정에 근거하여 집행되며 공모와 관련하여 분쟁

이 발생할 경우 대한민국 소재(우리회사 본사 관할) 법원에서 조정하거나 판결한다.

4. 유의사항

가. 제출기한내 접수되지 않는 서류는 인정할 수 없으며, 제출된 서류는 일체 반환하지 않는다.

나. 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 자가 발행하는 서류로 제출하여야 하며, 그 외의 증빙 서류는 인정하지 않는다.

다. 당선작에 대한 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작

권과 관련한 제반사항은 저작권 법령이 정하는 바에 따른다. 발주자는 별도 보상

없이 당선작품을 본 사업의 수행이나 홍보목적으로 사용할 수 있으며, 이외의

목적으로는 사용할 수 없다.

라. 응모자는 모든 관계법규 및 제반 규정사항에 대해 적법하게 계획하여야 한다.

마. 모든 도서에는 작성자를 알아볼 수 있는 문양, 채색 등 어떤 표시도 할 수 없으며 이를 위반시에는 자격무효로 할 수 있으며, 공정한 심사평가를 위해 당선작 선정전까지 참가자 또는 SNS등 매체를 통해 일반인 및 특히, 심사관계자등에게 제출안을 공개하지 않는다.

바. 사실과 다르게 기재, 심사에 영향을 끼쳐 당선된 주사무소 및 대표 건축사는 추후 관련법에서 정하는 기간동안 우리회사가 시행하는 용역에 참가를 제한한다. 특히, 비공식적인 방문 및 유선 접촉은 엄금한다.

사. 우리회사 사정으로 당선자와의 설계용역 계약 전 사업이 취소될 경우 당선자에게 공모보상비로 설계용역비의 10%를 지급한다.

아. 설계시 지장물 등을 확인하여 간섭이 없도록 설계하여야 한다.

자. 시상 및 보상을 제외한 응모비용은 보상하지 않는다.

□ 계획 ․ 중간 및 실시설계 용역시방서

❏ 일반시방서

1. 일반사항

○ 본 시방서는 설계공모(현상설계) 당선작을 기초로 하여 계획ㆍ중간ㆍ실시설계 용역을

시행하며, 각 설계도 및 용역업무에 관련된 사항의 이행과 문서 등의 작성에 대하여

적용한다.

2. 용역범위

가. 업무범위

구 분	계획설계	중간설계	실시설계
안동복합 2호기 직원사택 신축공사	○	○	○

나. 용어의 정의

1)‘계획설계’라 함은 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관적 측면에서 설계목표를 정하고    가능한 해법을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야 (구조,기계,토목,조경, 소방 등을 말한다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 우리회사에게 제안하여 승인을 받는 단계를 말한다.

2)‘중간설계’라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 우리회사로부터 승인을 받는 단계를 말한다.

3)‘실시설계’라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정, 설계 도서를 작성하여 우리회사로부터 승인을 받는 단계를 말한다.

다. 용역 업무범위

1) 건축사의 업무범위와 대가기준에 의한 단계별(계획·중간·실시설계) 설계업무 수행

- 안동복합 2호기 직원사택 및 복지시설(헬스장 등)

- 전체 부지 조경, 옥외시설물, 도로 및 주차장 등

2) 건축허가 등 인·허가, 심의 등에 필요한 일체 도서작성, 행정절차 수행 및 허가취득

3) 건축물 에너지효율 1등급2)(예비), 녹색건축 인증(예비), 제로에너지 건축물 인증(예비)을 위한 설계도서 검토서 등 제반서류 작성, 인증 및 평가기관 설계협의, 인증취득 업무(평가수수료는 발주처가 납부)

4) 건설공사 발주 서류 작성 : 입찰안내서, 시방서, 설계서, 예정공정표 등

5) 각종 계산서 작성 : 구조계산서, 수량산출서, 부하계산서 등

6) 종합디자인 계획 : 건축물 내·외부 경관 및 색채디자인 등

7) 기타 발주자가 요구하는 사항 등

3. 착수계 제출

○ 수급인은 계약체결 후 7일 이내에 착수계를 제출하고 설계에 착수하여야 하며, 착수계에

는 다음 각호의 서류를 제출하여야 한다.

가. 예정공정표

나. 세부시행계획서(분야별 세부 공정계획 포함)

다. 사업 책임기술자 관련서류(현장대리인계 및 사업자등록증, 보안각서, 이력서, 재직증명서, 면허  수첩 사본 등), 분야별 책임기술자 선정계, 분야별 책임기술자 명단(재직증명서 첨부)

라. 내역서

마. 분야별 용역수행 조직표

바. 분야별 참여기술자 투입계획 및 작업계획서

사. 기타 용역수행에 필요한 사항

4. 도서작성

○ 설계공모 당선작을 기초로 하여 시공 및 대관 인허가업무에 필요한 다음 각 항의 설계도

서 및 문서작성을 말한다.

가. 공통사항

1) 안동복합 2호기 직원사택 신축을 위한 건축, 토목, 기계, 소방, 통신분야

- 단계별(계획, 중간, 실시설계) 설계업무 수행 및 건축사의 업무범위와 대가기준에 의한 단계별(계획, 중간, 실시설계)설계 도서 및 공사완료(사용승인) 이후 준공도면

2) 단지종합계획 및 단지계획평면도

3) 대관 인․허가, 심의 등에 필요한 일체 도서, 행정절차 수행 및 인허가 취득

4) 에너지관련 인증 취득관련 서류(인증 대상여부 검토서 포함)

5) 신축부지 현황측량 자료(필요시 지반조사 수행 후 포함)

6) 건설공사 발주 서류 작성 : 입찰안내서, 시방서(자재규격서 포함), 설계서, 예정공정표 등

7) 각종 계산서 : 구조계산서, 수량산출서, 부하계산서 등(구조안전확인서 등 포함)

8) 신·재생에너지 설치계획, 자재규격서 등 관련법 의거한 설계 필요서류

9) 종합 디자인 계획 : 건축물 내·외부 경관 및 색채디자인 등

10) 주요 공법․장비․자재 선정 비교․검토

11) 시방서 : 일반시방 및 특기시방서

12) 공사비 산출내역서 : 실시설계 도서에 따라 공사비 산정

13) 수량산출서 : 실시설계 도서에 따라 수량산출

14) 주요 기기별 견적서 및 자재규격서

15) 용역 중간보고서

16) 용역 완료보고서

17) 층간 소음저감계획 및 설비관련 소음·진동 저감계획

18) 설계안전보건대장(필요시)

19) 기타 발주자가 요구하는 사항 등

나. 건축사항

1) 표지, 도면 목록표, 지적도, 배치도, 구적도, 면적산출표, 현장안내도

2) 각층 평면도 및 4면 입면도

3) 단면도 및 각부 상세도, 실내 벽 및 반자의 마감도

4) 수직동선 관련 상세도, 코아 등 상세 평면도

5) 구조도 (철근 일반상세 및 철근가공조립도 포함)

6) 창호 평면 및 창호도

7) 천장복도(설비공사 설치분 포함)

8) 마감표, 설계면적표

9) 구조계산서(책임구조기술자 날인, 구조안전확인서 포함)

10) 조감도 및 투시도 (대지포함 및 건물, 주요실)

11) 지반보강이 필요한 경우 시공성 및 경제성을 고려한 공법검토서

12) 시공과 수량산출에 필요한 시공 상세도면 및 기타

13) 각종 기계, 전기공사용 벽, 바닥 개구부 및 배관 슬리브위치, 개구부 보강 도면

14) 신재생에너지설비 기초(정착부 포함) 도면

15) 기타 각종 설계자료 등

다. 토목사항

1) 현황도 : 위치도, 현황측량도, 지적도

2) 공사계획 평면도 : 현황 포함

3) 토공도 및 토공유용계획 : 부지 종횡단면도, 표준굴착단면도, 유용계획서

4) 도로계획도 : 도로계획평면도, 도로 종․횡 평면도

5) 주차장 및 포장계획도 : 평면도 및 상세도

6) 옥외 급, 배수계획도 : 급·배수유역도, 우수·오수 계획도 및 종단면도, 급수, 오·배수 상세도 (건물외벽에서 연결되는 급수, 오·배수배관 연결 및 마감 상세 포함)

7) 오수 정화시설 및 부대시설(울타리 등 포함)

8) 구조물도 : 기본계획도 및 상세도

9) 지하매설물도 : 건축, 토목, 기계, 전기, 정보통신, 소방 등 포함

10) 구조계산서 (전문기술자 날인)

11) 옹벽계획도

12) 지질조사 보고서

13) 기타 각종 설계자료 등

라. 조경사항

1) 기본구상 및 개념도

2) 조경계획도 : 종합계획평면도, 녹지구적도, 식재평면도, 시설물평면도

3) 옥외시설물 배치도 및 상세도 : 주차장 등

4) 조경 설계보고서 및 각종 설계자료

5) 토지이용 및 도로계획서, 식재계획서, 환경보전방안 및 관리운영계획서

6) 기타 상세도 : 주요지역 입·단면도, 식재상세도, 시설물 상세도 등

마. 기계사항

1) 기계설비 계획서 및 검토서

2) 부하계산서 및 용량계산서

3) 장비선정 및 일람표 작성

4) 설비별 계통도

5) 설비별 배관 및 덕트 평면도

6) 기기배치도

7) 각종 기계실의 입면도, 단면도, 평면도

8) 부하계산서 및 용량계산서

9) 제작상세도

10) 각종 배관 슬리브 배치도 및 상세도 (건축도면에 위치 명확히 표시)

11) 각 덕트 샤프트 및 파이프 샤프트 확대도면

12) 자동제어 계통도, 평면도 및 기기 일람표

13) 옥내소화전 등 소화설비도

14) 소방시설(기계) 계획표

15) 기타 각종 설계자료 등

바. 정보통신사항

1) 통신설비 계획서 및 검토서

2) 통신설비 간선도, 평면도

3) 시공과 수량산출에 필요한 시공 상세도면 및 기타

3) 자동화재 탐지설비 간선도 및 평면도

4) 기기 배치도

5) 설비별 결선도

6) 외부회선 인입 계획서

7) 통신용 인입맨홀 위치도(맨홀 상세도는 토목도면에 반영)

8) 통신용 옥상기초 위치도(기초 설계는 건축 구조도에 반영)

9) 주요부분 상세도

10) 설비부하 및 장비용량 계산서

11) 기타 각종 설계자료 등

12) 항온항습설비 간선도 및 평면도

13) 통신기기실 청정소화약제 설비 간선도 및 평면도

5. 공정 비율

가. 계획, 중간 및 실시 설계의 가중치는 다음과 같다.

1) 계획 설계 : 20 %

2) 중간 설계 : 30 %

3) 실시 설계 : 45 %

4) 인허가 및 준공도서 : 5%

나. 계획ㆍ중간 및 실시설계

(단위: %)

구 분		건 축 (토목포함)	기 계	정보통신	소 계
계 획 설 계		15.5	3.4	1.1	20
중 간 설 계		23.2	5.2	1.6	30
실시설계	도면 작성	17.4	3.9	1.2	22.5
	구 조 (부하계산)	4.4	1	0.3	5.7
	수량산출	4.4	1	0.3	5.7
	시방서 작성	1.7	0.4	0.1	2.2
	건축허가	1.7	0.4	0.1	2.2
	설계서 작성	5.3	1.1	0.3	6.7
인허가	사용승인 및 준공도서	3.9	0.8	0.3	5
합 계		77.5	17.2	5.3	100

6. 공정보고

○ 설계자는 용역업무 진행에 따른 용역설계 추진현황을 격주 1회 서면 보고한다.

7. 공기변경

○ 우리 회사의 계획변경 등으로 인한 설계 소요일수는 상호 협의하여 변경하며, 우리 회사

의 행정소요일수(도면 및 수량검토 등) 및 해당 행정관서의 건축위원회 설계심의일수는

절대공기에 포함되지 않는다.

8. 설계

가. 설계는 관계법령 및 해당 행정관서의 조례, 지시 등에 적합하여야 한다.

나. 용역의 추가 또는 축소

설계 전 또는 설계 중 우리회사 방침변경 등의 사정에 의거 용역범위를 추가 또는 축소할 수 있으며, 이때 추가 또는 축소되는 용역량에 대하여는 우리회사 규정에 의거 계약변경 정산할 수 있으나, 이미 설계완료 된 사항을 준공불 지불 전 축소할시 용역비는 당초 계약대로 지불한다.

다. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

1) 건물 배치는 향후 활용을 고려하여 배치하여야 하며, 주변 여건(부지-건물간 연계성,

도로 및 보행자 통로 등)을 감안하여 연계동선 계획을 설계에 반영하여야 한다.

2) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기

가 적절하게 배분되어 경제적으로 최대의 효과를 얻을수 있는 합리적인 설계가

되어야 한다.

9. 설계자 책임 및 대외보안

가. 설계책임

1) 설계자는 본 용역의 기술적 및 법률(행정지시 및 각 규정포함)에 저촉되는 사항에

대하여는 용역완료 후에도 전적인 책임을 진다.

2) 시공중 설계하자에 대하여 우리회사에서 보완을 요구하면 즉시 보완하고 설계변경에

대하여도 설계자는 최대한 협조하여야 하며 이에대한 대가는 계약상대자에게 지급하

지 않는다.

나. 보안유지

설계자는 용역 착수계와 동시에 설계에 관한 기밀누설방지 및 자료반납의 이행을 위한 각서를 제출하며 설계자는 본 용역을 수행함으로 인해 얻어진 자료 및 내용들을 우리회사 사전 승인 없이 외부인 또는 외부단체에 제공 또는 공개해서는 아니된다.

다. 손해배상 책임

모든 설계도서는 계약상대자의 책임으로 작성하며, 업무를 수행함에 있어 고의 또는

과실로 인하여 우리회사에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에는 건축사법 제20조

(업무상의 성실의무 등)에 의한 손해를 배상할 책임을 진다.

10. 설계기준

가. 모든 설계는 우리회사가 제시한 요구조건에 부합되어야 하며 방침 및 의견이 상반될 시 우리 회사의 해석에 따른다.

나. 설계는 각 분야별로 관계 법령 및 행정관서의 조례, 지시 등에 적합하여야 한다.

다. 자재규격

사용자재는 한국산업규격(ＫＳ). (Ｑ). (전). (검）및 (품）표시규격 순으로 사용함을 원칙으로 하며, 설계반영시 해당 자재에 대한 시험성적 검증 등의 사전 품질검증 절차를 하여야 한다.

라. 구조계산

계산에 필요한 기준(설계방식 및 적용공식 등)은 가능한 한 국내기준을 활용함을 원칙으로 한다.(단, 외국규정의 적용이 불가피 할 시는 예외로 함)

마. 설계자료 제공

설계기준 및 기본자료 중 우리회사 제정의 자료 등 필요한 자료는 우리회사에서 제공한다.

11. 설계품질관리

가. 착공 후 10일 이내에 품질계획서 및 품질검사계획서(QIP)를 작성․제출하여 발주부서 및 품질 관리부서 검토 승인 후, 승인된 계획서에 의거 공정을 실명 확인하여야 한다.

나. 기본설계도면 완료직후에 1차 설계품질회의를 실시하여 검토의견 사항을 실시설계도서에 반영한다.

다. 실시설계도면 완성 전 2차 설계품질회의를 실시하여 세부설계에 대한 문제점을 파악하여 시정 조치한다.

라. 실시설계도면 완료 직후 3차 설계품질회의를 실시하여 세부설계 및 최종 마감설계도서에 대하여 종합적인 점검을 실시하여 시정 조치한다.

12. 도면작성

가. 기재요령

도면에 기재하는 단위는 C.G.S단위를 사용하고 명칭 및 참고 기재사항은 한글(필요시 영문사용)로 기재한다.

나. 축척

기준은 아래와 같으며 필요에 따라 변경할 수 있다.

1) 각층 평면도 및 입면도          － 1 : 100

2) 각종 상세도                    － 1 : 20  ～  1 : 50

3) 일반구조도 및 단면상세도       － 1 : 20  ～  1 : 100

4) 구조상세도                     － 1 : 20  ～  1 : 50

5) 기계실 기기도 및 배관평면도    － 1 : 30

6) 기타：공사에 적절한 축척

다. 도면번호 및 분류표 기재요령 : 우리회사 도면관리 요령에 의한다.

라. 캐드도면 작성 기준은 우리회사에서 정한 표준에 따른다.

13. 공사시방서(자재규격서) 및 수량산출서 작성

가. 수량산출서는 각 공종별, 층별, 부위별로 산출하되 계산식을 명료하게 작성한다.

나. 수량산출은 검토 승인된 도면에 따라 정미수량으로 산출하되 공사비예산서 작성에 적합하도록 항목 선정에 유의하여야 한다.

다. 자재규격서는 우리회사 소정양식에 의거 작성한다.

라. 공사 시방서는 일반 사항과 각 공종별 특기 사항으로 구분하여 상세하고 명료하게 작성한다.

마. 컴퓨터를 이용한 수량산출시, 이용한 프로그램 및 버전을 명시한다.

14. 공사 설계서 작성

가. 분야별 작성 사항

분야별 항목별로 구분 작성되는 세부공사 설계서에는 각각 아래와 같은 사항이 포함

되어야 한다.

1) 공사 계획서

2) 공사개요 설명서

공사명, 위치, 공사개요, 구조, 면적, 공사 기간, 공사 방법, 하자 기간 등

3) 공사 예정공정표

각 공정별 흐름과 기간, 계절적, 입지적 여건 등을 감안한 현실적인 공정표가 될 수

있도록 한다. 또한 산출근거자료 제시에 대한 감독원의 요청이 있을시 설계자는

이에 대한 충분한 자료를 제출해야 한다.

4) 일반시방서

5) 특기시방서

6) 공사비 예산서

7) 설계명세서

우리회사의 공사 관리 규정 및 작성 지침에 의해 작성하고 세부 서식은 별도 제시

하는 양식에 따른다.

8) 기타 : 품셈표, 부표 및 별표 등

나. 공사설계서 작성시 단가 기준

1) 노무비 : 최신 기준의 시중노임단가에 따름

2) 재료비 : 월간 물가 자료지, 조달청 발행 물가지 등의 순으로 적용한다. 단, 상기 물

가지에 없는 것은 유사 품목의 단가 또는 시중시세를 평가하여 적용하되

우리회사와 협의 후 적용한다.

다. 단가 적용 근거 자료 제출

설계자는 설계 명세서 작성시 단가 적용 근거를 설계서 및 일위대가표상에 명기하고

단가산정 근거 및 관련 자료를 제출한다.

라. 전산 자료 제출

공사설계서는 건축, 토목, 기계, 통신, 소방 등 각 분야 별로 우리회사가 지시한 컴퓨터 파일형태로 단가(재료비, 노무비, 경비), 품셈, 부표, 별표 등이 상호 연결되어 수정 가능 하도록 제출한다.

15. 제출서류

가. 서 류 인 쇄 : 우리 회사에 제출하는 서류는 인쇄된 것으로 하며 원도를 포함한다.

나. 검토용 서류 : 우리 회사의 검토 및 승인에 필요한 서류는 2부 이상으로 하며 CAD파일 등 전산자료도 함께 제출하여야 한다.

다. 준 공 납 품 : 준공검사 신청시 납품서류는 아래와 같다.

구분	설계도서명	규격	수량	단위	비 고
1	설계도면	A3	10	부	공사완료(사용승인) 이후 준공도면 2부 포함
2	공사설계서	A4	10	부	시방서, 예정공정표, 자재규격서, 내역서(실,공), 수량산출서, 단가산출서(견적서포함), 일위대가 포함 (전산파일 포함)
3	구조계산서	A4	5	부	구조안전확인서 등 안전서류 포함
4	기계장비부하계산서	A4	3	부
5	USB	각	5	개	공종별 통합
6	프레젠테이션판넬	A2	1	개
7	조감도 (또는 투시도)	-	3	개	조감도 80cm × 60cm (액자포함) 투시도 80cm × 60cm (액자포함)
8	종합보고서	A4	5	부	설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여 기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4규격의 책자로 양면 인쇄하고 좌철
9	측량 자료		3	부	필요시 지반조사 포함
10	단가적용 근거 목록 및 책자		1	부	설계서 검토요청 2주전 제출
11	기타 필요한 서류 및 자료		1	식
12	대관 허가 및 착공 신고시 필요서류		1	식

16. 대관 인허가 및 협의

가. 용역 시행에 있어 건축 인·허가(변경, 사용승인 포함) 및 제반 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의, 인증 등 필요한 업무를 계약상대자 부담으로 이행해야 한다.

(면허세 제세 및 에너지인증 수수료는 우리회사 부담함)

나. 계약상대자는 공공기관 에너지 추진지침, 녹색건축인증, 건물에너지효율등급 인증, 제로에너지 건축물 인증 등을 검토하여 반영하고 건축허가 신청 전 우리회사 및 대관 인․허가 기관과 사전협의 후, 필요시 제반 인․허가 조치를 시행하여야 한다.

다. 계약상대자는 본 용역이 완료된 후라도 건물 준공까지 일련의 대관 인·허가 관련 업무에 따른 서류보완이 필요할 경우 즉시 이를 이행하여야 한다.

라. 추후 발주처에서 전기분야 설계 분리발주, 업체선정 및 계약 후 해당업체와 원활한 사

업수행을 위해(인허가 취득 등) 협업하여야 한다.

17. 각종검사

가. 기성고

설계자는 용역계약일반조건 및 우리회사 규정에 의거 기성고 검사를 요청하여야 한다. 단, 첫회 기성고 지불요청은 대관 건축허가를 득한 후라야 한다.

나. 예비 준공검사

준공예정일 20일전까지 용역범위에 대한 성과물을 서면으로 제출하여 예비 준공검사를 받아야 한다.

다. 준공검사

본 설계가 완료되었을 때는 용역계약일반조건 및 우리회사 규정에 의거 준공검사를 요청하여야 한다.

18. 용역비 지불

가. 기성고

17항 "가"에 의거 기성고 요청이 있을시는 우리회사 규정에 의거 기성고를 지불한다.

나. 준공불

17항 "다"에 의거 준공검사 요청이 있을시 준공검사를 시행하며, 검사에 합격시 우리회사 규정에 의거 준공불을 지불한다.

다. 용역비 정산

1) 당초 추정공사비에 대한 설계서 작성 후의 공사비 증액에 따른 용역비는 정산하지

않는다.

2) 제 7. 공기변경항의 우리회사 행정소요일수 및 인허가 관청의 건축위원회 심의일수에

따른 공기변경과 제시 기준면적에 대한 설계면적 증감에 따른 용역비는 정산하지 않는다.

19. 저작권 및 소유권

○ 당선작에 대한 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과

관련한 제반사항은 저작권 법령이 정하는 바에 따른다. 발주자는 별도 보상없이 당선

작품을 본 사업의 수행(전기설계업체 계약 후 설계도서 공유 등)이나 홍보목적으로 사용

할 수 있으며, 이외의 목적으로는 사용할 수 없다.

20. 기  타

가. 엔지니어링 산업진흥법에 의거 산업통상자원부 신고업체에 설계를 하도급 하였을 때

는 우리회사에 이를 통보하여야 하며 하도급 설계에 따른 모든 책임은 설계자가 진다.

나. 계약상대자는 발주처의 승인·협의로 결정된 사항, 안전, 보안 및 비밀유지에 관한

사항에 대하여 하도급인에게 철저히 주지시켜야 한다.

다. 계약상대자는 발주처의 승인·협의로 결정된 사항, 보안 및 비밀유지에 관한 사항에

대하여 하도급인에게 철저히 주지시켜야 한다.

라. 하도급 설계시행시 설계업무상 상충되는 점은 설계자 책임하에 조정 및 보완하여

설계의 일관성을 유지하여야 하며 이로 인한 비용은 추가 지급하지 않는다.

마. 설계자는 준공계 제출시 설계에 참여한 기술자의 인적사항 및 업무수행 내용을 기록

하여 제출한다.

바. 용역을 수행함에 있어 남부발전 안전보건 관리규정을 준수한다.

사. 각종 설계자료

설계 반영된 각종 자재 및 공법에 대한 자료와 샘플 등 감독원이 필요하다고 요청하

는 사항은 즉시 제출하여야 한다.

바. 설계공모 당선안에 대한 내, 외부 변경 요구가 있을시 발주처와 협의 후 건축 관련 교수의 자문을 받아 변경 설계안을 제출하여야 한다.

❏ 특기 시방서

１. 건  축

가. 실시설계도 작성

1) Bar bending shedule 도면을 작성하여야 한다.

2) Bar bending shedule에는 철근번호, 종류, 직경, 길이, 굽힘상세, 개수, 총중량 등이 표기되어야 한다.

3) 시공이음, 신ㆍ수축 이음부의 위치, 간격, 설치방법 및 사용재료(채움재)에 대한 상세도면과 시공법을 작성 표기하여야 한다.

4) 도면상에 표시 안되는 부분은 도면 하단에 주서로 설명하여야 한다.

5) 타일공사, 석공사, 창호공사, 내장공사 등 상세가 필요한 부분은 시공 상세도를 작성하여야 한다.

나. 구조물 설계도상에 구조설계법(강도 설계법, 허용응력 설계법)을 명기하고, 필요시 시방내용을 명기한다.

다. 지하 구조물 상부가 지상층 통행 용도로 활용 될 경우 신축 공사중 토목 포장작업 장비등의 시공하중 및 준공 후 특수차량 등의 통행에 안전한 구조로 설계 하여야 한다.

라. 용역준공 후 신축공사가 착수되어 기초지내력, 지하수위, 수압 등 기초자료 및 가정설계에 의한 하중이나 부하가 공사현장의 직접 시험결과치와 다를 경우, 공사현장의 시험결과치를 비교하여, 이를 근거로 변경부분의 구조(부하)를 검토하여, 변경계산서 및 도면을 조속 제출하여 공사에 차질이 없도록 하여야 한다. 단, 이로 인한 변경설계분에 대한 정산은 없다.

마. 설계자는 건물에 작용할 수 있는 모든 종류의 하중(풍압, 지진하중 포함)에 대하여 최신 건축 구조기준에 맞게 충분한 강성, 강도가 확보되도록 안전하게 설계하여야 한다.

바. 부지배치계획에 따른 대지 종․횡단면도 및 구조설계와 관련하여 현황측량을 실시하고 지질(지반)조사가 별도 필요시 우리회사의 승인을 득한 후 시행하고 실적정산 한다.

2. 조  경

가. 조경설계는 환경친화(보존)적 계획․설계기법을 적극 반영하여 설계에 반영하여야 한다.

나. 조경설계는 전문업체 또는 전문기술자가 설계함을 원칙으로 하며 감독원에게 사전승인을 득한 후 시행하여야 한다.

다. 식재(교목, 관목, 지피, 초화류)는 기존 수목 등을 고려하여 선정하도록 하고 수종과 규격에 관해서는 우리 회사와 충분히 협의하여야 한다. 또한 대상 부지내 기존 수목 및 발전소 사토장의 표토 활용가능여부를 면밀히 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

라. 조경설계 시 해당 도시계획 및 기타 관련법규에 위배되는 사항이 없도록 해야 한다.

마. 설계자는 계획․중간설계 확정시 기존 수목활용방안에 관한 검토서를 제출하여야 한다.

바. 옥외 시설물(산책로, 운동시설물, 조경시설물 등)을 적절하게 설계하여야 한다.

3. 토   목

가. 구내도로, 구내배수, 급수, 오수 및 기타 토목 관련 계획, 중간, 실시설계는 우리회사관련 도면을 참조하여 진행한다.

나. 현황측량은 설계시 시행하고 별도의 지질(지반)조사가 필요시 실적정산 한다.

4. 기   계

가. 기계실은 기기배치, 유지관리에 충분한 공간을 확보한다.

나. 전기실 및 통신실 등 누수피해가 있는 실에는 배관설비를 하지 않아야 한다.

다. 쾌적하고 유지보수 및 설비의 효율적 운영이 되도록 하여야 한다.

라. 다음 각 법․령․규칙 등을 설계용역 용역수행에 적용하여야 한다.

1) 에너지이용합리화법 및 고효율 에너지기자재 보급촉진에 관한 규정

2) 건축법, 동법 시행령, 시행규칙 및 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

3) 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법, 동법 시행령, 시행규칙 및 소방기술

기준에 관한 규칙

4) 수도법, 동법 시행령, 시행규칙

5) 하수도법, 동법 시행령, 시행규칙

6) 환경보전법, 동법 시행령, 시행규칙

7) 열사용기자재 관리규칙

8) 녹색건축물 조성지원법, 건축물 에너지효율등급 및 제로에너지건축물 인증에 관한

규칙

마. 부하계산서 작성은 에너지 절약을 위한 건물의 부위별 성능 및 설비기준(한국에너지기술연구원), 에너지 절약형 신축설계기준 및 냉난방 부하계산서 Factor 적용 기준에 따라 작성한다.

바. 냉·난방은 설비의 효율성과 안전성을 고려하여 비교검토하고 우리 회사의 승인을 득한 후 설계하여야 하며, 향후 발주자 요구시 열공급시설(지역난방)이나 발전폐열등을 이용하는 난방을 고려한 설계가 되도록 한다.

사. 냉·난방설비, 급수설비, 환기설비, 오배수 통기설비, 배관설비, 소화설비, 방음 방진 등 설비계획에 있어 효율적이고 경제적인 설계가 되도록 한다.

아. 오·배수설비는 가능한 한 자연배수가 되도록 하여야 한다.

자. 절수형 세정방식 및 절수형 수전을 적용하여야 한다.

차. 오수정화설비는 관련 법규 및 지역조례에 따라야 한다.

카. 소화설비별 설치대상 건물의 규모는 소방시설공사업법, 동시행령 및 시행규칙에  따른다.

타. 연결 살수설비 송수구는 미관을 고려하여 적정 위치에 설치한다.

5. 정보통신

가. 방송시설은 소방법에 적합하여야 하며 관리시설 단위로 방송이 되도록 한다.

나. 바닥배선은 슬라브 배관매입 시스템박스 방식으로 계획하여야 한다.

다. 배관규격 및 공수는 시설되는 설비를 구분하여 설계하여야 한다.

라. 낙뢰 및 갑작스런 전류급증 등으로부터 전자 통신설비를 보호하고 설비 운영자의 안전을 도모하기 위한 전자 통신용 접지시설을 설치한다.

마. 정보통신 사용전 검사 기준에 적합하여야 하며 전기통신기자재의 형식승인에 관한 고시를 준수하여야 하며 통신 접지설비, 구내통신 설비, 선로설비 및 통신 공동구 등에 대한 기술기준 및 유선방송국설비 등에 관한 기술기준의 기술 규격을 준수하여야 하며 이 외 기타 명기되지 않은 사항은 당사의 승인을 얻어 설계하여야 한다.

바. 초고속 정보통신 건물인증 ‘특등급’을 기준으로 계획한다.

사. 정보통신설비는 IBS를 수용할 수 있도록 하고, 향후 정보통신설비의 증설 및 발전된 시스템 도입 시 각 실의 구조 변경 없이 자유롭게 설치가 가능하도록 한다.

아. 방송시설 : 방송은 화재안전기준(NFSC202)에 적합하도록 하여야 한다.

자. CCTV 감시 시스템

1) 남부발전에서 요구하는 장소의 감시가 가능하도록 설치되어야 한다.

2) 녹화(디지털방식)가 가능한 장치를 하여야 하고 관리실에 감시장치를 배치하여야 한다.

6. 공  통

장애인ㆍ임산부등 노약자를 대상으로 공용공간(건물 및 부지내)을 이용하는데 불편함이 없게끔 하며 건물내의 장애인을 위한 편의시설을 장애인ㆍ임산부ㆍ노인등의 편의증진보장에관한 법률에 저촉되지 않도록 설계하여야 한다.

7. 종합조정

아래사항은 도면 및 설계서 작성시 서로 오류가 발생하지 않도록 각 관련부분(건축, 토목, 기계, 전기, 전자통신, 소방)이 서로 유기적으로 협조되어야 한다.

가. 건물내의 오수, 우수관과 건물 외 맨홀의 연결부분 등

나. 상수도 및 가스관의 인입, 통신선로의 인입

다. 기계설비 및 전기, 전자통신의 슬리브 위치 등

라. 건물 급,배기 및 환기설비 등

마. 기타 분야별 협의를 요하는 사항

첨 부

1. 안동복합 2호기 직원사택 개요 1부

2. 예정부지 위치도 1부

3. 기타 관련서식 1부

- [기타서식 1] 응모신청서 1부

- [기타서식 2] 설계공모 참여자 명단 1부

- [기타서식 3] 대표자 선임계 1부

- [기타서식 4] 공동응모 협정서 1부

- [기타서식 5] 설계공모 서면질의서 1부

- [기타서식 6] 응모작품 제출서 1부

- [기타서식 7] 관련법규 검토서 1부

- [기타서식 8] 공사, 용역사업 보안특약 1부

- [기타서식 9] 설계공모 표지 1부

- [별첨 1] 심사위원 명단 1부

- [별첨 2] 각 시설별 면적.  끝.

【첨부 1】

안동복합 2호기 직원사택 개요

구 분	세 부 내 용
대지위치	경상북도 안동시 풍산읍 안교리 407, 408-2부지
대지면적	2,281㎡
지역/지구	제2종 일반주거지역
건축 연면적	약 2,126㎡
건폐율	60% 이하
용적률	100% 이상 250% 이하
주차계획	최소 20대(법 준수 하에 최대치 확보)
조경면적	약 750㎡

※ 상기 개요는 기본계획으로 상세설계에 따라 변동가능

【첨부 2】

예정부지 위치도

○ 배치(안)은 예시이며 사용성, 형태, 높이 등을 고려하여 종합사무실 부지내 최적의 배치 및 형태계획을 자유롭게 제안

【첨부 3】

한국남부발전(주)

기타 관련서식

【기타서식 1】

응모신청서
※ 접수번호
대 표	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			생년월일
	주 소			전화번호(FAX)
	E-mail
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
한국남부발전(주)에서 주최하는『안동복합 2호기 직원사택 신축공사』설계공모에 있어서 입찰공고 및 설계지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 설계공모 참여자 명단 1부. 2 0 2 5. . . 신청인 : (인) (대표자) 한국남부발전(주) 전원개발처장 귀하
-------------------------------------- 절 취 선 --------------------------------------
응모신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			생 년 월 일
주 소			전화번호(FAX)

【기타서식 2】

설계공모 참여자 명단

본인은 한국남부발전(주)에서 시행하는 「안동복합 2호기 직원사택 신축공사」설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2025.   .   .

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

한국남부발전(주) 전원개발처장 귀하

【기타서식 3】

대 표 자 선 임 계

설계사무소 및 대표자 성명		생년월일
주 소
근무처(연락처)		전화번호

상기인을 『안동복합 2호기 직원사택 신축공사』설계공모에 응모하는 대표자로 선임하였음을 인감증명서를 첨부하여 확인합니다.

2025년    월    일

1. 확인자 : 업체명                        대표자              (인)

2. 확인자 : 업체명                        대표자              (인)

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로  작품을 제출시 한사람의 대표자를 선임해야 함.

【기타서식 4】

공 동 응 모 협 정 서(예시)

제1조 (목적) 이 협정서는『안동복합 2호기 직원사택 신축공사』설계공모를 (     )와  (   )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :        )

2. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :        )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의  구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및  구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2025.   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

지 분 율 :

○ 공동응모업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

지 분 율 :

한국남부발전(주) 전원개발처장

【기타서식 5】

설 계 공 모  서 면 질 의 서

대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호
설계사무소명		전화번호
소 재 지		E-Mail 주소
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용
	※ E-Mail: beaverlove@kospo.co.kr, kkh6096@kospo.co.kr FAX : 051-639-9028 - 접수 확인 필 (070-7713-8544, 8547)

【기타서식 6】

응모작품 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
작 품 제출자	대표 업체명
	대표자(건축사)
	소 재 지					전화
귀 회사에서 주최하는 『안동복합 2호기 직원사택 신축공사』 기본 및 실시 설계용역 건축설계자 선정을 위한 설계공모에 응모작품을 제출합니다. 첨부 1. 설계설명서 및 도면 10부 2. 조감도 (또는 투시도) 1부 및 사진 2매 3. USB 1매 2025. . . 신청인 (인) 한국남부발전(주) 전원개발처장 귀하
절 취 선
『안동복합 2호기 직원사택 신축공사』 설계공모 작품 접수증
접 수 번 호				접수일시				접 수 인
설계사무소명
대표자(건축사)
소 재 지				전화번호

【기타서식 7】

관련법규 검토서

□ 사업명 : 『안동복합 2호기 직원사택 신축공사』

법 규 명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비 고

【기타서식 8】

공사, 용역사업 보안특약

2025. 03

	한국남부발전주식회사

공사, 용역사업 보안특약

① 사업자는 한국남부발전(주)의 보안정책을 위반하였을 경우 [별표1]의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표2]의 보안 위약금을 한국남부발전(주)에 납부한다.

② 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표3]의 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출시 한국남부발전(주)는 국가계약법 시행령 제76조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.

③ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업종료시 보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

④ 사업자는 용역사업에 투입되는 모든 인원 및 대표자에 대하여 사업 착수전 [별표4]의 보안서약서를 작성하여 제출하고 사업완료 후에는 대표자명의로 [별표5]의 보안확약서를 한국남부발전(주)에 제출하여야 하며, 사업 참여인원의 인력교체 발생시 사전에 발주담당부서의 서면 승인을 받아야 한다.

⑤ 한국남부발전(주)의 보안담당부서에서는 보안 취약개소 확인, 보안대책 강구 및 보안 위규사항 적발 등을 위하여 사업기간 중 불시 및 정기보안점검을 시행할 수 있으며, 이에 성실히 응해야 한다.

⑥ 참여기업의 아이디어, 기술자료 및 영업비밀을 제공받는 자는 기술자료의 제공목적, 비밀의 대상이 되는 기술자료의 범위, 위반 시 배상 등에 관한 사항이 포함된 비밀유지협약을 체결해야 한다.

[별표 1] 사업자 보안위규 처리기준

[별표 2] 보안 위약금 부과 기준

[별표 3] 누출금지 대상 정보

[별표 4] 보안서약서

[별표 5] 보안확약서

[별표 6] 표준비밀유지협약서

[별표 1]

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 회사의 문서, 대외비 등 중요 현황정보 등의 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 회사 중요시설물, 문서에 대한 불법적 행위 가. 주요시설에 대한 무단침입 및 자산반출 시도 나. 작업 결과물에 대한 외부 유출 다. 시설물에 대한 인위적인 파괴행위	◦ 사업참여 제한 ◦ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦ 재발방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보․신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실ㆍ보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 통제구역 출입 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 비인가 휴대용 IT기기를 기관 업무망에 무단연결 사용 나. 비인가 USB저장매체를 기관 업무용PC 및 제공된 기관PC에 무단연결 사용 다. 제공된 기관PC를 무단 외부 반출한 경우 라. 제공된 기관PC를 Wifi, 무선 인터넷 등 기관에서 제공하지 않은 네트워크에 무단 연결하여 사용한 경우 마. 제공된 기관PC의 보안프로그램을 강제 삭제한 경우 바. 불필요한 개인정보, 문서, 사진 및 도면파일 등을 보관 사. 제공된 중요문서, 사진 및 도면파일 등을 암호화 조치 없이 보관	◦ 위규자 및 직속감독자 등 중징계 ◦ 재발방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상특별보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 기관 제공 중요정책ㆍ민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안ㆍ보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책ㆍ현안자료를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷ㆍ서류함ㆍ책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제ㆍ제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 제공된 보안USB 등 이동형 USB기기를 서랍ㆍ책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 제공된 기관PC에 게임, 동영상, 크랙된 프로그램 등 불법 S/W 무단 설치 사용 다. 제공된 기관PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, 보안USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅ㆍ화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. 제공된 기관PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 바. 사무실에서 무선 공유기 등 비인가 무선 네트워크 사용	◦ 위규자 및 직속 감독자 등 경징계 ◦ 위규자 및 직속 감독자 사유서 /경위서 징구 ◦ 위규자 대상특별보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기ㆍ인쇄기 위에 서류 방치 다. 업무자료 파기시 파쇄기를 이용하지 않고 파기한 경우 2. 전산정보 보호대책 부실 가. 페이스북, 밴드 등 SNS를 이용한 업무자료 공유 나. 제공된 기관PC 보안프로그램의 주기적 점검 위반	◦ 위규자 서면ㆍ구두 경고 등 문책 ◦ 위규자 사유서 /경위서 징구

[별표 2]

보안 위약금 부과 기준

구분	위규 수준
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록	계약금의 5%이하	계약금의 3% 이하	계약금의 1% 이하

* 사업 종료시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

* 위규 수준은 [별표 1] 참고

[별표 3]

누출금지 대상정보

1. 기관 소유 주요 시설물 현황

2. 사무실, 통제구역 등 출입문 비밀번호

3. 문서, 사진, 도면 등 중요 정보 전자파일 및 출력물

4. 용역사업 결과물

5. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로

분류된 기관의 내부문서

6. 「개인정보보호법」제2조제1호의 개인정보

7. 「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조제3항의 대외비

8. 그 밖에 기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

[별표 4]

보 안 서 약 서

본인은     년   월   일부로                관련 용역사업(업무)을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은                관련 업무중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장, 국가이익 및 한국남부발전(주)에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

5. 한국남부발전(주)의 보안정책을 따르지 않거나 소홀히 함으로써 발생되는 모든 문제에 대하여 어떠한 책임이라도 감수한다.

년      월      일

서  약  자        업   체   명 :

(계 약 사)         직        위 :

성        명 :                        (서명)

생 년  월 일 :

서약집행자        소        속 :

(담당부서장)       직        위 :

성        명 :                        (서명)

생 년  월 일 :

[별표 5]

보 안 확 약 서

본인은 귀 기관과 계약한                         사업의 수행을 완료함에 있어, 다음 각 호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며 이에 확약서를 제출합니다.

1. 본 업체(단체)는 업체(단체) 및 사업 참여자가 사업수행 중 취득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 취득한 정보에 대한 유출을 절대 금지하겠습니다.

2. 본 업체(단체)는 하도급업체에 대해 상기 항과 동일한 보안사항 준수 책임을 확인하고 보안확약서를 징구하였으며, 하도급업체가 위의 보안사항을 위반할 경우, 주사업자로서 이에 동일한 법적 책임을 지겠습니다.

3. 본 업체(단체)는 상기 보안사항을 위반할 경우에 귀 기관의 사업에 참여제한 또는 기타 관련법규에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

년      월      일

서약업체 대표

회   사   명 :

직        위 :

성        명 :                        (서명)

한국남부발전(주) 귀하

[별표 6]

비밀유지협약서

한국남부발전(이하 “한국남부발전”이라 한다)와(과) 수행기관(계약상대자)는(은) 비밀정보의 제공과 관련하여 다음과 같이 비밀유지협약을 체결한다.

제1조(협약의 목적) 본 협약은 한국남부발전와(과) (계약상대자)가 『(업무 요지 기재) (이하 “본 업무”라 한다)』와 관련하여 각자 상대방에게 제공하는 비밀정보를 비밀로 유지하고 보호하기 위하여 필요한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(비밀정보의 정의)  ① 본 협약에서 ‘비밀정보’라 함은, 본 협약 체결 사실 자체 및 본 업무와 관련하여, 제공하는 일체의 정보로서, 유·무형의 여부 및 그 기록 형태를 불문한다.

② 제1항의 비밀정보는 서면(전자문서를 포함하며, 이하 같음), 구두 혹은 기타 방법으로 제공되는 모든 노하우, 공정, 도면, 설계, 실험결과, 샘플, 사양, 데이터, 공식, 제법, 프로그램, 가격표, 거래명세서, 생산단가, 아이디어 등 모든 기술상 혹은 경영상의 정보와 그러한 정보가 수록된 물건 또는 장비 등을 모두 포함한다.

제3조(비밀의 표시) ① 정보제공자가 정보수령자에게 서면 제출, 이메일 전송, 물품 인도 등 유형적 형태로 비밀정보를 제공하는 경우, 비밀임을 알리는 문구(“비밀” 또는 이와 유사한 표지)를 명확히 표시해야 한다.

② 정보제공자가 정보수령자에게 구두나 영상 또는 당사자의 시설, 장비 샘플 기타 품목들을 관찰･조사하게 하는 방법으로 비밀정보를 제공할 경우에는, 그 즉시 정보수령자에게 해당 정보가 비밀정보에 속한다는 사실을 고지하고, 비밀정보 제공일로부터 30일 이내에 상대방에게 공개 범위, 공개 일자, 공개 장소 및 공개 대상자 등이 명시된 요약본을 서면 제출, 이메일 전송 등의 유형적인 기록 형태로 제공하여야 한다.

③ 정보제공자가 비밀정보에 해당함에도 불구하고, 제공 당시에 비밀정보임을 명확하게 표시하지 못하였거나 고지하지 못한 때에는 정보제공자는 지체없이 정보수령자에 대하여 해당 정보는 비밀정보임을 고지함과 동시에 공개 범위, 공개 일자, 공개 장소 및 공개 대상자 등이 명시된 요약본을 서면 제출, 이메일 전송 등의 유형적인 기록 형태로 제공하여야 하고, 이때로부터 비밀정보로서 효력을 가진다.

제4조(정보의 사용용도 및 정보취급자 제한) ① 정보수령자는 정보제공자의 사전 서면 승인이 없는 한 정보제공자의 비밀정보를 “본 업무”의 수행 또는 “본 업무”와 관련된 계약에서 정한 본래의 목적 및 용도로만 사용하여야 하며, “본 업무”와 관련하여 사용하는 경우에도 필요한 업무 수행의 범위를 초과하여 임의로 비밀정보를 복제, 수정, 저장, 변형 또는 분석할 수 없다.

② 정보수령자는 직접적･간접적으로 “본 업무”를 수행하는 담당자(임직원, 참여연구원 등)들에 한하여 정보제공자의 비밀정보를 취급할 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 하며, 해당 담당자(임직원, 참여연구원 등) 각자에게 정보제공자의 비밀정보에 대한 비밀유지의무를 주지시켜야 한다. 이때 정보제공자는 정보수령자에게 해당 담당자(임직원, 참여연구원 등)으로부터 비밀유지서약서를 제출 받는 등의 방법으로 해당 정보의 비밀성을 유지하기 위하여 필요한 조치를 요구할 수 있다.

③ 정보수령자가 ‘본 업무’의 수행을 위하여 정보제공자의 비밀정보를 “본 업무”를 수행하는 담당자(임직원, 참여연구원 등)들 이외의 제3자에게 제공하고자 할 때에는 사전에 정보제공자로부터 서면에 의한 동의를 얻어야 하며, 정보수령자는 제3자와 해당 비밀정보의 유지 및 보호를 목적으로 하는 별도의 비밀유지협약을 체결한 이후에 그 제3자에게 해당 비밀정보를 제공하여야 한다.

제5조(비밀유지의무) ① 정보수령자는 정보제공자의 사전 서면승낙 없이 비밀정보를 포함하여 본 협약의 내용, ‘본 업무’의 내용 등을 공표하거나 제3자에게 알려서는 아니 된다. 다만, 객관적인 증거를 통하여 다음 각 호에 해당함이 입증되는 정보는 비밀정보가 아니거나 비밀유지의무가 없는 것으로 간주한다.

1. 비밀정보 제공 이전에 정보수령자가 이미 알고 있거나 알 수 있는 정보

2. 정보수령자의 고의 또는 과실에 의하지 않고 공지의 사실로 된 정보

3. 정보수령자가 정당하고 적법하게 제3자로부터 제공받은 정보

4. 정보수령자가 정보제공자의 비밀정보를 이용하지 아니하고 독자적으로 개발하거나 알게 된 정보

5. 정보제공자가 비밀정보임을 고지하지 아니하고, 비밀정보에 속한다는 취지의 서면을 발송하지도 아니한 정보

6. 법원 기타 공공기관의 판결, 명령 또는 관련법령에 따른 공개의무에 따라서 공개한 정보

② 정보수령자가 제1항 제6호에 따라 정보를 공개할 경우에는 사전에 정보제공자에게 그 사실을 서면으로 통지하고, 상대방으로 하여금 적절한 보호 및 대응조치를 할 수 있도록 하여야 한다.

③ 정보수령자는 비밀정보를 보호하고 관리하는 데에 필요한 모든 노력을 다하여야 한다. 다만 천재지변, 화재 등 불가항력 사유에 의해 비밀정보가 유출된 경우에는 유출에 대한 책임을 지지 않는다.

제6조(손해배상) 정보수령자가 본 협약을 위반한 경우, 정보수령자는 이로 인하여 정보제공자가 입은 모든 손해를 배상하는 것을 포함하여, 법률상 배상 책임을 다하여야 한다.

제7조(비밀정보의 반환 등) 정보수령자는 협약기간의 만료 등의 사유로 본 협약이 종료된 경우,  본 업무가 종료 또는 중단된 경우 또는 정보제공자의 요청이 있는 경우에는 지체없이 정보제공자의 비밀정보가 기재되어 있거나 이를 포함하고 있는 제반 자료, 장비, 서류, 샘플, 기타 유체물(복사본, 복사물, 모방물건, 모방장비 등을 포함)을 즉시 정보제공자에게 반환하거나, 정보제공자의 선택에 따라 이를 폐기하고 그 폐기를 증명하는 서류를 그 때로부터 10일 내에 정보제공자에게 제공하여야 한다.

제8조(권리의 부존재 등) ① 본 협약에 따라 제공되는 비밀정보에 관한 소유권, 지식재산권 등의 모든 권리는 정보제공자에 속하며, 비밀정보를 통하여 특허출원 등이 가능할 경우 특허 등을 출원할 권리는 정보제공자에게 있다.

② 본 협약은 어떠한 경우에도 정보수령자에게 비밀정보에 관한 어떠한 권리나 권리의 실시권 또는 사용권을 부여하는 것으로 해석되지 않는다.

③ 본 협약은 어떠한 경우에도 당사자 간에 향후 어떠한 확정적인 협약의 체결, 제조물의 판매나 구입, 실시권의 허락 등을 암시하거나 이를 강제하지 않으며, 기타 본 협약의 당사자가 비밀정보와 관련하여 다른 제3자와 어떠한 거래나 협약관계에 들어가는 것을 금지하거나 제한하지 아니한다.

④ 정보제공자는 비밀정보의 현 상태 그대로 제공하며, 비밀정보의 정확성 및 완전성이나 사업 목적에 대한 적합성 및 제3자의 권리 침해 여부에 대한 어떠한 보증도 하지 않는다.

⑤ 정보제공자는 정보수령자가 비밀정보를 사용함에 따른 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 아니한다.

⑥ 각 당사자는 본 협약의 목적을 위하여 상대방의 시설을 방문하거나 이를 이용할 경우에는 상대방의 제반 규정 및 지시사항을 준수하여야 한다.

제9조(권리의무의 양도, 협약의 변경) ① 각 당사자는 상대방의 사전 서면동의 없이 본 협약상의 권리의무를 각 당사자 이외의 제3자에게 양도하거나 이전할 수 없다.

② 본 협약의 수정이나 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 기명날인 또는 서명한 서면 합의로만 이루어질 수 있다.

제10조(협약의 분리가능성) 본 협약 중 어느 규정이 법원에 의하여 위법, 무효 또는 집행 불가능 하다고 선언될 경우에도, 이는 본 협약의 나머지 규정의 유효성에 영향을 미치지 아니한다.

제11조(분쟁의 해결) ① 본 협약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 당사자의 상호 협의에 의한 해결을 모색하되, 분쟁에 관한 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 중소기업기술 보호 지원에 관한 법률에 따른 중소기업기술분쟁조정·중재위원회의 조정 또는 중재에 따라 해결한다.

② 위 조정이 성립하지 아니한 경우 [예시: 서울중앙지방법원]을 제1심 관할법원으로 하여 소송을 통해 분쟁을 해결하기로 한다.

제12조(보칙) ‘한국남부발전’과 (계약상대자)은 본 협약의 성립을 증명하기 위하여 본 협약서 2부를 작성하여 각각 서명(또는 기명날인)한 후 각자 1부씩 보관한다.

20____년 ____월 ____일

“한국남부발전”

(명 칭)________________________

(주 소)________________________

(대표자)____________________(인)

“(계약상대자)”

(명 칭)________________________

(주 소)________________________

(대표자)____________________(인)

【기타서식 9】

"선택용지 : A3"      【우측정렬/위쪽, 오른쪽 여백 고정, 네모칸 그대로 사용】

안동복합 2호기 직원사택 신축공사

설 계 공 모

【가운데 정렬/글자크기 48 point /줄간격 160% / 자간 0% / 신명조체】 -------- 출력시 삭제 하세요

【별첨 1】

심사위원 명단

구 분		성 함	소 속
심사위원 명단 (예비심사위원 포함)	1	윤정근 교수	경남정보대학교 건축디자인과
	2	하호진 교수	경성대학교 건축학과
	3	표응석 교수	동서대학교 건축학과
	4	성이용 교수	동아대학교 건축학과
	5	이태문 교수	동의대학교 건설공학부
	6	황덕현 교수	신라대학교 건축학부
	7	김소희 교수	영남대학교 건축학부
	8	신경철 교수	영산대학교 건축공학과
	9	박근송 교수	창원대학교 건축학부
	10	유진상 교수	창원대학교 건축학부

【별첨 2】

각 시설별 면적

구 분		면적(㎡)	비 고
부지(대지)		2,281
주거시설	1. 전용세대	1,008	주거면적은 기준치 이내로 제한
	2. 공용부 (주차장, 기계실, 헬스장)	782	면적 ± 10% 가능
	3. 코어 (E/V, 계단실)	336
건축연면적		2,126
부대시설	4. 조경시설	750
	5. 테니스장	648
부대시설 면적		1,398